S P E C Y F I K C J A     I S T O T N Y C H
W A R U N K Ó W     Z A M Ó W I E N I A 

na przetarg  nieograniczony na 
Odbudowę i rozbudowę Zalewu Bliżyńskiego na rzece Kamiennej w Bliżynie, gmina Bliżyn 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą

zadanie Nr 01/2009 

Z A T W I E R D Z A M
11.03.2009r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

I. Nazwa i adres zamawiającego:
GMINA BLIŻYN
26-120 Bliżyn ul. Kościuszki 79 a 
woj. świętokrzyskie, pow. skarżyski
tel. (0-41) 254-11-04, 254-11-72, fax (0-41) 254-12-36

II. Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 
z późn. zm.) oraz zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

III. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: 
zadanie Nr 01/2009 – Odbudowa i rozbudowa Zalewu Bliżyńskiego na rzece Kamiennej 
w Bliżynie, gmina Bliżyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą
	Zadanie Nr 01/2009 polegać będzie na przebudowie istniejącego jazu wraz z dobudową przelewu stałego, odbudowie zapory ziemnej zniszczonej w trakcie powodzi, odbudowie czaszy zbiornika z ukształtowaniem brzegów i pogłębieniem płycizno powierzchni 10,34 ha i pojemności 182 tys. m3 , wykonaniu pomostów przy kąpielisku, wykonaniu przepławki dla ryb, przebudowie istniejącego mostu kolejowego na most drogowy, wykonaniu ciągów pieszych i pieszo-rowerowych wzdłuż brzegów zbiornika, wykonaniu drogi oraz odwodnienia, wykonaniu oświetlenia wokół zbiornika, przebudowie i wykonaniu wodociągu, wykonaniu placów postojowych oraz przebudowie linii telefonicznej.  
(45246100-4, 45247200-2, 45246500-8, CPV 45111200-0, 45111100-9, 45247100-1, 45221112-0, 45233000-9, 45111000-8, 45111000-9, , 45247200-2, 45232130-2, 45232400-6, 45233142-6, 45242100-6, 45231300-8, 45231300-8, 45232300-5, 45232210-7, 45315700-5, 45314300-4, 45316110, 45317000).
Roboty należy wykonać zgodnie pozwoleniem na budowę wydanym przez Wojewodę Świętokrzyskiego - decyzja nr 41/08 znak: IG.II.7111.W-10/08 z dnia 22.08.2008 r. oraz pozwoleniem na budowę wydanym przez Starostę Skarżyskiego – decyzja nr 256/2008 znak: AB-7351/160/08 
z dnia 2.09.2008 r. i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi stanowiącymi Załącznik nr 8 do SIWZ.

IV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Prawa zamówień publicznych, 

VI. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – do 30 grudnia 2011 r.  

VIII. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.	Spełniają warunki określone w art.22 ust.1 Pzp.
2.	Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 Pzp.
3.	Mają do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel (osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy) posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
w następujących specjalnościach: melioracji wodnych, budowli hydrotechnicznych, drogowych, mostowych (lub konstrukcyjno-budowlanych bez ograniczeń), sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, sieci telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą..
4.	Zrealizowali jako główny Wykonawca z należytą starannością w ciągu ostatnich 5 lat, co najmniej jedną robotę o zakresie, rodzaju i charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia; powierzchnia zwierciadła wody wykonanego zbiornika przy NPP min. 6,0 ha.
5.	Dysponują sprzętem, niezbędnym do realizacji zamówienia.

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia, 
w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wymienionych w punkcie IX SIWZ.

IX. Oświadczenia i dokumenty wymagane od Wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie składania ofert w formie określonej 
w niniejszej SIWZ:
1.	Formularz oferty wg załącznika nr 1.
2.	Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i art. 24 Pzp – załącznik nr 2.
3.	Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się ze SIWZ, projektem umowy i, że przyjmuje je bez zastrzeżeń (na druku oferty wykonania).
4.	Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5.	W przypadku wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
6.	Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionymi nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7.	Oświadczenie Wykonawcy z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 3.
8.	Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności – załącznik nr 4. Należy dołączyć dokumenty potwierdzające wymagane prawem uprawnienia budowlane do kierowania robotami w następujących specjalnościach: melioracji wodnych, budowli hydrotechnicznych, drogowych, mostowych (lub konstrukcyjno-budowlanych bez ograniczeń), sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, sieci telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zaświadczenia o przynależności do właściwej izby.
9.	Wykaz zawierający dane dotyczące wykonania przynajmniej jednej roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem, zakresem i charakterem przedmiotowi zamówienia 
z określeniem daty i miejsca wykonania, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, załącznik nr 5. Powierzchnia zwierciadła wody wykonanego zbiornika przy NPP powinna wynosić min. 6,0 ha. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty wymienione w wykazie zostały wykonane należycie.
10.	Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń.
11.	Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej – załącznik nr 7.
Wszystkie dokumenty winny być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność przez Wykonawcę.

X. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
1.	Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.
2.	Dokumenty lub informacje przekazywane faksem uważa się za złożone w terminie, jeśli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu i została niezwłocznie (tj. w ciągu 3 dni) potwierdzona na piśmie przez przekazującego.
3.	Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

XI. Osobą uprawnioną do udzielania informacji i kontaktu z Wykonawcami jest Pani Katarzyna Cichocka w godz. od 8.00 do 15.00.

XII Wymagania dotyczące wadium
1.	Zamawiający żąda wniesienia przez wykonawcę wadium w kwocie 110 000,00 PLN.
2.	Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
3.	Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek bankowy nr 04 8520 0007 2001 0010 5688 0002. 
4.	Zamawiający będzie postępował z wadium zgodnie z art. 46 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
5.	Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy złożyć w kasie Urzędu Gminy 
w Bliżynie, zaś kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.

XIII. Termin związania ofertą
1.	Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
2.	Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3.	W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu na warunkach określonych w prawie zamówień publicznych.

XIV. Opis sposobu przygotowania ofert:
1.	Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie 
z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ.
2.	Ofertę należy sporządzić na druku stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
3.	Do oferty należy dołączyć wszystkie oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszej SIWZ.
4.	Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę wówczas jego oferty zostaną odrzucone.
5.	Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
6.	Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki muszą być podpisane przez osobę/y/ uprawnione do podpisania oferty. Upoważnienie do podpisania oferty musi być załączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów dołączonych przez Wykonawcę.
7.	W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1997 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W tym celu powinny być dołączone w osobnej wewnętrznej kopercie (odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie) oznaczonej: „Tajemnica przedsiębiorstwa”.
8.	Wszystkie strony oferty winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się oferta.
9.	Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę – osobę/y/ upoważnioną/e/ do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.
10.	Wszystkie dokumenty przedstawione przez Wykonawcę należy dołączyć w formie określonej w punkcie IX SIWZ.
11.	Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez Wykonawcę informacji.
12.	 Ofertę należy złożyć w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu. Opakowanie oferty musi zostać oznaczone pieczęcią firmową Wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu oraz opisem: „Oferta na zadanie nr 01/2009 Odbudowa i rozbudowa Zalewu Bliżyńskiego na rzece Kamiennej w Bliżynie, gmina Bliżyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”.
13.	Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany lub o wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert, określonym w niniejszej SIWZ.
14.	Powiadomienie powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie, oznaczonej nazwą przedmiotu zamówienia, pieczęcią firmową Wykonawcy i dodatkowo określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
15.	Zwrot wycofanej oferty nastąpi bez jej otwierania po terminie otwarcia ofert.
16.	Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcy bez ich otwierania po udzieleniu zamówienia. 
17.	Ofertę należy złożyć do dnia 03.04.2009 roku do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój Nr 1 (sekretariat).
18.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.04.2009 roku o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego - pokój Nr 15a.
19.	Otwarcie ofert jest jawne.

XV. Opis sposobu obliczania ceny:
	Cena oferty będzie sumą iloczynów cen jednostkowych i jednostek przedmiarowych robót przewidzianych do wykonania. Jednostki przewidziane do wykonania będące podstawą do określenia ceny oferty są określone na druku „kosztorys ofertowy” stanowiący załącznik nr 1A do specyfikacji. Obliczenia ceny należy wykonać na podstawie kosztorysu ofertowego. W ofercie należy podać cenę brutto cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT (w % oraz cyfrowo i słownie) jak również cenę netto cyfrowo i słownie. Ceny jednostkowe określone dla każdej pozycji kosztorysu ofertowego wchodzące w skład zadania są cenami ryczałtowymi netto i obejmują wszystkie koszty związane 
z wykonaniem danej jednostki obmiarowej. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane 
z realizacją zadania wynikające wprost z przedmiaru robót jak również koszty wynikające z wniosków 
z przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie, w tym wykonanie: robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy oraz jego zabezpieczenia i wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym nastąpi w złotych polskich.

XVI. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie oferowana najniższa cena oferty – 100%. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną spośród ofert nie odrzuconych. Oferta ta otrzyma 100 punktów. Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej według wzoru:

Cx – liczba punktów badanej oferty
Cn- najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych
Cof.b- cena oferty badanej nie odrzuconej
100 – wskaźnik stały
100% - procentowe znaczenie kryterium ceny.
Obliczenia dokonywane będą z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

XVII. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty: 
1.	Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając imię i nazwisko lub nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie wyboru oferty, o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz 
o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne. 
2.	Ponadto informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.
3.	Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa na warunkach określonych w załączniku nr 6 do niniejszej SIWZ. 
4.	Po zawarciu umowy zamawiający przekaże ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.

XVIII. Waluta oferty
Waluta obowiązująca dla oferty jest PLN. Wszystkie kwoty oferty powinny być wyrażone w PLN. 

XIX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1.	Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 
2.	Zabezpieczenie, wykonawca winien wnieść najpóźniej w dniu podpisania umowy w jednej z form określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
3.	W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana 
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 
4.	Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego i będzie z nim postępował zgodnie z przepisami ustawy.

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania czynności, do których jest zobowiązany, Wykonawcom przysługują środki odwoławcze przewidziane w dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy Prawo zamówień publicznych.

XXI. W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych.

XXII Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej.
Zamawiający nie będzie stosował dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający nie będzie zwracał Wykonawcom kosztów poniesionych za udział w postępowaniu.

Załączniki:
1.	Formularz oferty – załącznik nr 1.
2.	Kosztorys ofertowy – załącznik nr 1A
3.	Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 2.
4.	Oświadczenie Wykonawcy z art. 36 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 3.
5.	Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności – załącznik nr 4.
6.	Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia – załącznik nr 5.
7.	Projekt umowy – załącznik nr 6.
8.	Oświadczenie wykonawcy o dokonaniu wizji lokalnej  – załącznik nr 7.
9.	Specyfikacja techniczna – załącznik nr 8.

Zał. Nr 1

..................................... .......... 
(Nazwa i adres Wykonawcy)							(miejscowość, dnia)

O F E R T A    W Y K O N A N I A

Po zapoznaniu się z warunkami przetargu na Zadanie Nr 01/2009 Odbudowa i rozbudowa Zalewu Bliżyńskiego na rzece Kamiennej w Bliżynie, gmina Bliżyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą oferujemy wykonanie robót objętych przetargiem za następującą cenę: 

brutto .......................... zł. (słownie kwota  brutto: .....................................................................
.................................................................................................................................................zł.)
netto .......................... zł. (słownie kwota netto: .........................................................................
.................................................................................................................................................zł.)
podatek VAT w wysokości ..................... %. tj.: ......................... zł. (słownie kwota VAT: ....................................................................................... .............................................................)
określoną na podstawie kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej oferty.
Roboty nie przewidziane zostaną rozliczone na bazie następujących wskaźników kosztorysowych: "R"........................, "Ko"......................, "Z".....................,
materiały - wg cen kosztorysu ofertowego.
Cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost 
z przedmiaru robót jak również koszty wynikające z wniosków z przeprowadzonej wizji lokalnej 
w terenie, w tym wykonanie: robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy oraz jego zabezpieczenia. 

Termin wykonania zamówienia – do 30 grudnia 2011r.

1.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2.	Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
3.	Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4.	Informujemy, że dane zawarte w ofercie w osobnej kopercie oznaczonej „Tajemnica przedsiębiorstwa” stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (firmy) w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawnione innym uczestnikom przedmiotowego postępowania.* 
5.	Oferta zawiera .................... kolejno ponumerowanych stron.
6.	Załącznikami do niniejszej oferty są:
1)	..........................................................................................................................
2)	..........................................................................................................................
3)	..........................................................................................................................
4)	..........................................................................................................................
5)	..........................................................................................................................
6)	..........................................................................................................................
7)	..........................................................................................................................
8)	..........................................................................................................................
9)	..........................................................................................................................
10)	..........................................................................................................................

Data .............................. 2009 r

	........................................................
Podpisy osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy	
* - jeśli nie dotyczy wykreślić cały punkt

Załącznik nr 2

............................................................
(pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Zadanie nr 01/2009 Odbudowa i rozbudowa Zalewu Bliżyńskiego na rzece Kamiennej 
w Bliżynie, gmina Bliżyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  
Ja (imię i nazwisko)
.......................................................................................................................................................
jako upoważniony przedstawiciel
firmy.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:
-	posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
-	posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję/emy/ osobami zdolnymi do wykonania zamówienia*,
-	posiadam pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia potencjału technicznego 
i osób zdolnych do wykonania zamówienia - w załączeniu stosowne zobowiązanie*,
-	znajduję/emy/ się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
-	nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust. 1 i 2 Pzp.

...................................................... 			...................................................................
           miejscowość, data						podpis/y/ osob/y upoważnionej/ych 
								do reprezentowania firmy

	

Załącznik nr 3

...................................................................
(pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy 
z art. 36 ust.  4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późn. )

	Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

zadanie Nr /2009 Odbudowa i rozbudowa Zalewu Bliżyńskiego na rzece Kamiennej w Bliżynie, gmina Bliżyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Ja (imię i nazwisko)
.......................................................................................................................................................
jako upoważniony przedstawiciel
firmy.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że zamierzamy/ nie zamierzamy*
powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia.
WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PRZEWIDZIANYCH DO POWIERZENIA PODWYKONAWCOM
Lp.	Nazwa i adres podwykonawcy	Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę	

			
			
* niepotrzebne skreślić
..............................................................		....................................................................
miejscowość, data							podpis/y osob/y
upoważnionej/ych do reprezentowania firmy

Załącznik nr 4

..........................................................................
(pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy)

Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności
zadanie Nr 01/2009 Odbudowa i rozbudowa Zalewu Bliżyńskiego na rzece Kamiennej 
w Bliżynie, gmina Bliżyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Lp.	Imię i nazwisko	Proponowane stanowisko	Opis uprawnień	

				

Uwaga:
Należy załączyć dokumenty potwierdzające wymagane prawem uprawnienia i przynależność do izby.
Miejscowość i data: ................................... 2009 r.
								Podpisano.................................................................................................
											(upoważniony przedstawiciel wykonawcy)
Załącznik nr 5

..........................................................................
(pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy)

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia

Zadanie Nr 01/2009 Odbudowa i rozbudowa Zalewu Bliżyńskiego na rzece Kamiennej 
w Bliżynie, gmina Bliżyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Lp.	Robota budowlana	Miejsce wykonania	
Powierzchnia lustra wody przy NPP
	Wartość zamówienia 
w tyś. zł.	Data realizacji	

						

						
						
(należy dołączyć referencje od zamawiających)

Miejscowość i data: .......................... 2009 r.

Podpisano

.............................................................................
(upoważniony przedstawiciel wykonawcy)

Załącznik Nr 6
U M O W A

Zawarta w dniu ........................... pomiędzy
Gminą Bliżyn, 26-120 Bliżyn, ul. Kościuszki 79a posiadającą NIP 663-12-57-935, REGON 291009981
zwanej dalej „Zamawiającym”,
reprezentowaną przez
Wójta Gminy – Mariusza Walachnię
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Aliny Ołownia
a firmą ........................................................................................................................................
z siedzibą w ................................................................................................................................
posiadającą NIP ..................................., REGON .........................................
zwaną dalej „Wykonawcą”
reprezentowanym przez:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

 1
Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego nr 01/2009 z dnia ...............2009r. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO roboty budowlane w ramach inwestycji: „Odbudowa i rozbudowa Zalewu Bliżyńskiego na rzece Kamiennej w Bliżynie, gmina Bliżyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w skład której wchodzi następujący zakres rzeczowy: przebudowa istniejącego jazu wraz z dobudową przelewu stałego, odbudowa zapory ziemnej zniszczonej w trakcie powodzi, odbudowa czaszy zbiornika z ukształtowaniem brzegów i pogłębieniem płycizn o powierzchni 10,34 ha i pojemności 182 tys. m3 , wykonanie pomostów przy kąpielisku, wykonanie przepławki dla ryb, przebudowa istniejącego mostu kolejowego na most drogowy, wykonanie ciągów pieszych i pieszo-rowerowych wzdłuż brzegów zbiornika, wykonanie drogi oraz odwodnienia, wykonanie oświetlenia wokół zbiornika, przebudowa i wykonanie wodociągu, wykonanie placów postojowych oraz przebudowa linii telefonicznej.  
1.	Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz w:
1)	złożonej ofercie – Załącznik Nr 1
2)	kosztorysie ofertowym – Załącznik Nr 1A
3)	harmonogramie rzeczowo-finansowym - Załącznik Nr 2
stanowiących integralne części niniejszej umowy.

 2
1.	Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do: 
1)	wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego, 
2)	informowania w formie pisemnej Zamawiającego o przebiegu wykonywania umowy na każde żądanie Zamawiającego oraz przedstawiania sprawozdań.
2.	Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie Inżynier Kontraktu. 
3.	Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie: ....................................................... posiadający uprawnienia budowlane ............................................................................................. zam. ...................................................................................
4.	Zakres nadzoru inwestorskiego zostanie określony w odrębnej umowie na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, zaś obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 171 z późn. zm.).

 3
1.	Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania: projektu budowlanego, dziennika budowy, terenu budowy w terminie do dnia .........................................
2.	Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi aż do chwili wykonania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy.
3.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za urządzenia istniejące na terenie budowy po jego przekazaniu.

 4

1.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:
1)	projektem budowlanym opracowanym przez: „INŻYNIERIA” Biuro Usług Inżynierskich 
i Nadzoru Inwestorskiego, Kielce, ul. Helska 29.
2)	pozwoleniem na budowę Wojewody Świętokrzyskiego znak: IG.II.7111.W-10/08 z dnia 22.08.2008 r. Nr 41/08 oraz Starosty Skarżyskiego znak AB-7351/160/08 z dnia 02.09.2008r. Nr 256/2008.
3)	obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych,
4)	ze złożoną ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do umowy i ze specyfikacją techniczną,
5)	zasadami sztuki budowlanej.
2.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów stanowiących jego własność. 
3.	Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 2. powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać:
1)	Polskim Normom,
2)	wymaganiom projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej,
3)	wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
4.	Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty zgodnie z prawem budowlanym.
5.	Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które wchodzą w zakres przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowiązany jest je przeprowadzić.
6.	Wykonawca zobowiązuje się do informowania:
1)	pisemnie Zamawiającego – za pośrednictwem Inżyniera Kontraktu – o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych sporządzając protokół konieczności określający zakres robót oraz szacunkową ich wartość (wg oferty),
2)	o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót jak i zmianę wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robót oraz do współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.
7.	W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac nie objętych ofertą oraz specyfikacją techniczną Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy.
8.	Roboty dodatkowe i zamienne będą możliwe tylko w przypadku jeśli rodzaj robót bądź ich ilość nie zostały uwzględnione przez ZAMAWIAJĄCEGO w przedmiarze robót, a zostaną uznane za niezbędne do zakończenia robót i prawidłowego funkcjonowania obiektów.
9.	Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:
1)	urządzenia terenu budowy, 
2)	oznakowania terenu budowy,
3)	w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,
4)	wykonania badań i prób jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających,
5)	dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku, wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
6)	odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,
7)	zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
8)	utrzymana terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,
9)	umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego,
10)	uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

 5
1.	Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.

 6

1.	Termin rozpoczęcia robót budowlanych nastąpi w dniu ...........................2009 r.
2.	Termin zakończenia robót budowlanych i wykonania przedmiotu umowy nastąpi w dniu 30.10.2011r.
3.	Termin odbioru końcowego i przekazania obiektu do eksploatacji nastąpi w dniu 30.12.2011 r.
4.	Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot umowy 
w terminach zapisanych w niniejszej umowie.
5.	Wykonawca przekaże w dniu zakończenia robót budowlanych Zamawiającemu teren budowy.

 7

1.	Po zakończeniu etapu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy 
i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez Inżyniera Kontraktu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru częściowego.
2.	Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty:
1)	protokóły z prób i badań technicznych, atesty na wbudowane materiały,
2)	dziennik budowy,
3)	rozliczenie częściowe (etapu) budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości 
i wartości brutto - ogółem oraz netto /bez podatku VAT/.
3.	Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących przedmiot umowy po zakończeniu każdego etapu w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia 
i powiadomi uczestników odbioru.
4.	Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni licząc od daty rozpoczęcia odbioru częściowego.
5.	Protokół odbioru częściowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru częściowego.
6.	Odbiory częściowe dopuszcza się jedynie po zakończeniu każdego etapu określonego kwartalnie 
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej umowy.
7.	Suma faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę nie może przekroczyć 80% wysokości wynagrodzenia umownego za wykonanie roboty.

 8

1. Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru przez Inżyniera Kontraktu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru końcowego. 
2.	Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty:
1)	protokóły z prób i badań technicznych, atesty na wbudowane materiały,
2)	dziennik budowy,
3)	oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, zgłoszeniem zamiaru budowy, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,
4)	rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości ogółem oraz netto (bez podatku VAT).
3.	Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.
4.	Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić (zakończyć) w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.
5.	Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru

 9

1.	Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1)	jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;
2)	jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
a)	 jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
b)	 jeżeli wady uniemożliwiając użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

 10

1.	Wykonawca ma prawo podpisać umowę o wykonanie części robót budowlanych z podwykonawcami wymienionymi w przyjętej ofercie przetargowej.
2.	Wykonawca może podpisać umowę o podwykonawstwo z podwykonawcami nie wymienionymi w ofercie przetargowej pod warunkiem wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.
3.	Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników 
w takim samym zakresie jak za swoje działania.
4.	Jeśli Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą bez zgody, o której mowa w ust. 2, Zamawiający może bez przekazania formalnego zawiadomienia o tym, według swojej decyzji zastosować sankcje za naruszenie Umowy, tzn. zażądać odszkodowania lub wypowiedzieć Umowę.
5.	Podwykonawcy muszą spełniać określone w dokumentacji przetargowej kryteria dla zawarcia umowy.

 11

1.	Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot Umowy, liczonej od dnia odbioru końcowego. 
2.	Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 3 dni od dnia ich ujawnienia.
3.	Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach.
4.	Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu gwarancji.

12

1.	Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.
2.	Kary będą naliczane w następujących przypadkach w wysokościach:
1)	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
a)	zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
b)	za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia do terminu ustalonego na usunięcie wad,
c)	za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia Wykonawcy.
2)	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za:					
     a)  zwłokę w przekazywaniu terenu budowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia  
              umownego  za każdy dzień zwłoki.

 13

1.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ........................... PLN, co stanowi 5 % wartości umowy, dostarczone będzie Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy 
w pełnej wysokości w formie .............................................................................................................
2.	Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone 
w następujący sposób:
1)	70 % w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym,
2)	pozostałe 30 % w nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.
3.	W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

 14

1.	Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w następującej wysokości:

brutto ................................. PLN (słownie kwota brutto: ................................................)
netto ................................... PLN (słownie kwota netto: ..................................................)
podatek VAT w wysokości 22 %. tj.: .......................... PLN (słownie kwota VAT: ...............).
zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.
2.	Wartość całkowita przedmiotu umowy ani ceny nie będą waloryzowane w okresie realizacji umowy.
3.	Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktycznie wykonanego zakresu robót oraz zweryfikowanego przez Inżyniera Kontraktu kosztorysu powykonawczego 
z uwzględnieniem postanowień niniejszej umowy.
4.	Należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT. Faktura powinna być adresowana do Gmina Bliżyn, 26-120 Bliżyn, ul. Kościuszki 79a, NIP 663-12-57-935.
5.	Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru wykonanych robót podpisany przez Inżyniera Kontraktu z uwzględnieniem postanowień art. 6.
6.	Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy Nr .................................................................. w ciągu 14 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru końcowego spowodują naliczenie ponownego 7 - dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.

 15

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

 16

1.	Przy realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.	W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy prawo budowlane. 
3.	Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
4.	Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim; 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy. 

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA

Załączniki:

1.	Oferta wykonania – Załącznik Nr 1
2.	Kosztorys ofertowy – Załącznik Nr 1A    
3.	Harmonogram rzeczowo-finansowy - Załącznik nr 2.

Załącznik Nr 2 do umowy z dnia ....................................
Harmonogram rzeczowo-finansowy
Odbudowa i rozbudowa Zalewu Bliżyńskiego na rzece Kamiennej w Bliżynie, gmina Bliżyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Lp.	Opis robót	Wartość netto	2009	2010	2011	
			II kw	III kw	IV kw	I kw	II kw	III kw	IV kw	I kw	II kw	III kw	IV kw	
1	Budowla przelewowo upustowa wraz z zaporą ziemną													
2	Budowla przelewowo upustowa wraz z zaporą część mechaniczna – zamknięcie jazu													
3	Czasza zbiornika													
4	Przebudowa istniejącego mostu kolejowego													
5	Budowa dróg dojazdowych do zbiornika (D1 z placem postojowym, D2, D3)													
6	Promenada 1, 1A,1B, 2 i ścieżka pieszo-rowerowa przy zbiorniku													
7	Oświetlenie terenu wokół zbiornika													
8	Kładka żelbetowa													
9	Odwodnienie ul. Henryków													
10	Pomost przy kąpielisku wraz z ukształtowaniem dna do celów kąpieli													
11	Przebudowa i rozbudowa wodociągu													
12	Przebudowa linii telefonicznej													
13	Przepławka													
14	Razem kwartalnie												
15	Razem rocznie					

Załącznik nr 7

...................................................................
(pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy o dokonaniu wizji lokalnej 
i zapoznaniu się z projektem budowlanym

Zadanie Nr .../2009 Odbudowa i rozbudowa Zalewu Bliżyńskiego na rzece Kamiennej w Bliżynie, gmina Bliżyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Ja (imię i nazwisko)
.......................................................................................................................................................
jako upoważniony przedstawiciel
firmy.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:
dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie planowanej budowy.
W związku z powyższym oświadczamy, że uwzględniliśmy te warunki w kalkulacji ceny ofertowej.

Miejscowość i data: ............................... 2009 r

Podpisano

......................................................................................
(upoważniony przedstawiciel wykonawcy)